2026년 제3차 정기

전라남도 지방재정 투자심사위원회 의결 내역

1		심사 주문

□ 지방재정 투자사업 45개 사업에 대하여 다음과 같이 심사 의결함.

□ 심사 의결 : 45개 사업(적정 2, 조건부 31, 2단계 5, 재검토 7)

□ 사업별 심사의견 및 내용은 아래 심사 결과와 같음.

2		공통사항

□ 지방재정 투자사업

□ 중기지방재정계획 반영(수정) 및 사업추진에 필요한 행정절차 이행

□ 청사, 체육‧문화시설 등 공공시설

- ｢건축서비스산업진흥법｣에 따른 공공건축 기획업무 등을 통해 사업 필요성 검증, 사업내용 구체화

- 공유재산관리계획 수립 및 청사신축 비용 공개 등 사전절차 이행

- 공용(계획) 중인 공공시설에 대한 운영수지 분석 등을 통해 운영 미흡 및 적자시설에 대해서는 개선방안 마련 등 효율적인 운영방안 강구

- 공공건축심의, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등 관련 행정절차 추진

□ 축제 등 각종 행사 관련 투자사업

- ｢지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.)｣ 참고하여 안전, 교통, 주차대책 등을 충실하게 마련

- 지역특산물 판매, 일자리 창출, 수익 창출, 콘텐츠 및 프로그램 개발

- 축제 등 행사 결과를 평가하여 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 필요

□ 균특전환사업

- 시 관련 부서 및 예산담당관(국고예산팀)과 재원 조달방안 마련 후 추진하고, ’26년 이후 전환사업 종료 시 잔여 사업비는 시․군비 전액 부담

※ 향후 정부 정책 등으로 인한 여건 변화 시 통합시와 별도 협의

3		지방재정 투자사업 심사 결과 ▸ 45개 사업(적정 2, 조건부 31, 2단계 5, 재검토 7)

연번	기관별	사 업 명 (심사구분)	사업 기간	위치 및 사업량	사업비 (억원)	심사내용
						의견	결과
1	본청 (화학 철강 산업과)	디지털기반 자원순환 시범산단 구축사업	2026. ~ 2027.	- 여수 국가산업단지 - 산업단지내 자원순환 네트워크를 작성하여 기업 연계 자원순환 분석･촉진 - 산업단지에서 발생한 부산물(유기성오니, 폐유기용제 등)을 이용한 자원순환 설비지원 - AI기반 자원순환 시스템 구축	125 (국 75) (시 9) (시 21) (민자 20)	◦인건비 및 연구활동비 등 용역비 성격의 예산에 대한 집행 관리 철저를 통해 예산의 목적외 사용 방지 및 사업비 정산 철저 ◦개발기술이 산업단지 전반에 확산될 수 있도록 사후관리 철저 ◦사업 종료 후의 구체적인 유지·관리 계획 수립 ◦제시된 성과목표의 달성 여부를 객관적으로 확인할 수 있는 성과관리체계 마련	조건부
2	본청 (해운 항만과)	녹동신항 투기장 호안 축조공사	2026. ~ 2030.	- 고흥군 도양읍 봉암리 일원 - 준설토 투기장 호안 L=1,100m	463 (국 -) (시 463) (시군 -)	◦실시설계 과정에서 사업비 조정이 예상되므로 실시설계 후 2단계 심사 이행 ◦공유수면 매립 허가, 해역이용협의 등 관련 행정절차 이행 철저 ◦준설토 발생량과 투기수요를 재검토하여 호안 규모 적정성 확보 ◦장기 유지관리비와 재정부담을 고려한 사업 타당성 및 경제성 검토 강화 필요 ◦기대효과 정량적인 효과도 분석하여 제시 ◦연차별 재원 확보계획을 철저히 관리 ◦환경 생태계에 미치는 영향 최소화 및 오염물질 배출 방지 대책, 부실공사 방지 대책, 주민 피해 방지 대책 등 제시	조건부 2단계
3	본청 (섬해양정책과)	여수 신기항 지방어항 건설사업	2027. ~ 2035.	- 여수시 돌산읍 신기리 신기항 일원 - 방파제 156m, 북측호안 99m, 물양장 130m	161 (국 -) (시 161) (시군 -)	◦실시설계 과정에서 사업비 조정이 예상되므로 실시설계 후 2단계 심사 이행 ◦시설 규모가 실제 이용수요에 부합하도록 설계단계에서 적정 규모 검토 필요 ◦지역 주민의견이 반영되도록 설계 과정에서 주민설명회 등 시행 ◦공유수면 매립 허가, 해역이용협의 등 관련 행정절차 이행 철저 ◦환경 생태계에 미치는 영향 최소화 및 오염물질 배출 방지 대책, 부실공사 방지 대책, 주민 피해 방지 대책 등 제시 ◦준공 후 어항시설 유지관리 주체와 연간 관리비 부담 계획	조건부 2단계
4	본청 (중소 벤처 기업과)	디지털커머스 전문기관 (소담스퀘어) 운영 지원	2026. ～ 2031.	- 목포시 영산로 101(목포MBC 3층, 4층[본관]), 목포시 호남로64번길 37(보해양조[별관]) - 조성면적 951.7㎡(본관 833, 별관 118.7) - 소담스퀘어 스튜디오 등 인프라 구축 2개소(본관 및 별관)	103 (국 45) (시 7) (시군 20) (기타 31)	◦인건비 및 연구활동비 등 용역비 성격의 예산에 대한 집행 관리 철저를 통해 예산의 목적외 사용 방지 및 사업비 정산 철저 ◦본관·별관 2개소의 시설별 기능과 이용수요를 명확히 설정하고, 유휴공간 발생을 방지할 운영계획 마련 ◦민간부담금 31억원의 조달 및 지속가능한 운영재원 확보방안을 구체화하고 재정부담이 확대되지 않도록 관리 필요 ◦통합특별시 차원의 이용권역·기능 권역별 거점시설 중복 조정 및 연계방안 필요 ◦남도장터, 전남정보문화산업진흥원 등 기존 온라인 판로지원 사업과의 역할 분담 및 연계 ◦특정 기업·단체의 스튜디오 독점 사용을 방지할 이용자 선정 기준과 예약·배정 규정 마련 ◦상인, 지역민, 전문가 의견수렴 과정과 채널 마련 ◦컨퍼런스홀과 스튜디오 등 각 단위사업별 운영주체와 운영방법, 관리계획 구체화 필요 ◦연도별 집행 및 추진 상황 점검을 통한 성과관리 철저	조건부
5	본청 (문화산업과)	남도 영화제 개최	2027. ~ 2029.	- 장흥군 일원(빠삐용 ZIP등) - 개·폐막식 행사, 영화상영, 공연, 홍보 등	15 (국 -) (시 10) (시군 5)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦구체적인 성과지표 및 경제적 파급효과 검증계획 보완 ◦연차별 사업비 및 재원계획을 명확히 정리 ◦관적인 성과지표를 마련하여 매년 평가결과를 차년도 사업계획 및 예산에 반영 필요 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립 ◦전남의 숨은 명소와 영상 촬영 최적지를 실제 상업 영화 및 드라마 장소로 유치 방안 강구	조건부
6	목포시	장기미집행 갓바위 근린공원조성 사업 (재심사)	2020. ~ 2027.	- 목포시 상동 1080번지 일원(갓바위근린공원) - 공원 조성 296,101.3㎡ (둘레길 4,691.3㎡, 원형보전녹지 291,410.0㎡)	192 (국 -) (시 -) (시군 107) (기타* 85) *지방채	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦총사업비 200억원 이상으로 증가시에는 중앙투자심사 대상임 ◦장기미집행 해소 효과와 공원 조성에 따른 시민 이용편익을 명확히 제시 ◦녹지 훼손 최소화 및 원형보전녹지의 체계적 관리방안 마련 ◦사업 추진에 따른 지역민, 전문가 의견수렴 과정과 채널 마련 ◦사업효과 극대화를 위한 H/W조성에 따른 구체적인 S/W프로그램과 연계하여 추진 전략 마련 ◦잔여 토지 보상에 필요한 재원을 적기에 확보하고, 실시계획 실효 전 보상 관련 절차를 차질 없이 추진 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	조건부
7	목포시	전남광주통합특별시 공공산후조리원설치 (재심사)	2025. ~ 2027.	- 목포시 옥암동 977-2, 977-5 일원(미즈아이병원) - 부지 970.1㎡, - 연면적 2,215.81㎡ - 공공산후조리원 1개소	95.86 (국 -) (시 40) (시군 8.71) (민자 47.15)	◦사업비·운영비 및 민자재원 확보계획을 구체화하여 재정부담 최소화 방안 마련 필요 ◦민간 병원 부지 내 설치에 따른 시설 소유권, 의무운영기간, 위탁운영 조건 등 공공성 확보 장치 명시 ◦연간 운영비 및 향후 유지관리비를 고려하여 운영기관의 자부담 이행과 지방재정 부담을 지속적으로 관리 ◦증축하는 산후조리원 건축물이 기존건물과 주변환경과의 조화는 물론 산후조리원이라는 상징성이 반영될 수 있도록 설계반영 검토 ◦산모, 보호자 등 이용에 불편이 없도록 충분한 주차면수 확보 검토	조건부
8	목포시	목포해상W쇼	2027. ~ 2029.	- 평화광장 해상무대 (목포시 평화로 82) - K-POP 콘서트, 춤추는 바다분수, 불꽃쇼, 드론쇼가 결합한 해상 멀티미디어 공연 운영	10.5 (국 -) (시 -) (시군 10.5)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦지방재정영향평가 심의 절차 준수 필요 ◦목포의 정체성과 ‘목포해상W쇼’를 특화한 기념품 개발 방안 검토 ◦관람객 유치 및 지역경제 활성화 등 성과지표를 구체화하고 사업비 집행의 효율성 제고 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립	조건부
9	여수시	계획공모형 지역관광개발사업	2025. ~ 2029.	- 여수시 돌산읍 우두리 일원 - 부지 158,000㎡, 연면적 828㎡ - 빛섬 파크 및 빛섬 테라스 조성, 빛섬파크 상시 및 축제 프로그램, 섬섬 트래블 프로그램, 빛섬 연계 활성화 프로그램, 빛섬 관광 브랜딩 및 홍보마케팅	165 (국 60) (시 18) (시군 87)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦기본계획 내용 실시설계에 잘 반영하고 계획 변경시 행정절차 이행 등 철저 ◦총사업비 200억원 이상으로 증가시에는 중앙투자심사 대상임 ◦사업 완료 후 운영·관리비 등 지속적인 지방비 부담능력 사전 분석 ◦사업 추진에 따른 지역민, 전문가 의견수렴 과정과 채널 마련 ◦기존 시설물과 S/W프로그램과의 연계 가능성 분석하여 효율적인 활용방안 제시 ◦수요예측의 적정성을 검증하고 실제 이용실적에 따른 운영수지 관리 필요 ◦섬 박람회 종료 후 관광객 등 수요를 재분석하여 반영 검토	조건부
10	여수시	소라면 죽림국민체육센터 건립사업 (2단계)	2025. ~ 2028.	- 여수시 소라면 죽림리 1309 - 부지 2,500㎡, 연면적 2,969.83㎡ - 국민체육센터 (지하1층~지상2층/1동) - 수영장(25m*4레인) 및 다목적체육관 등	154 (국 30) (시 -) (시군 124) (기금 )	◦시설 규모·운영계획을 면밀히 검토하여 준공 후 운영비 부담 최소화 ◦웅천국민체육센터(’26. 1. 개관)의 개관 후 이용실적 자료를 근거로 한 죽림지구 수요예측 재검증 ◦건설기술진흥법령에 의한 건설사업관리 등 체계적으로 추진될 수 있도록 철저한 준비 ◦내실있는 공사감리위해 건설사업관리계획수립시 산출된 적정인원수의 감리원배치 ◦태양광시설은 건축물 유지관리는 물론 기후변화대응과 탄소중립실천위해서도 필요하므로 적극 반영 검토 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	조건부
11	순천시	순천푸드앤 아트페스티벌	2027	- 순천시 중앙로 일원 - 푸드마켓 운영, 예술 작품 전시, 판매, 체험, 공연 등	7.5 (국 -) (시 -) (시군 7.5)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦식음료(F&B)부스 종사자 대상 특별 위생 교육 및 현장 관리 철저 ◦도심 통제에 따른 우회 노선 및 셔틀버스 정밀 기획 필요 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립 ◦외부관광객 확보, 관광산업 연계, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 경제활성화로 이어질 수 있는 방안 마련	조건부
12	순천시	바이오가스화시설 주민친화 체육공원 조성사업 (2단계)	2025. ~ 2027.	- 순천시 교량동 620-23번지 일원 - 체육시설(축구장, 파크골프장 등) 조성	138 (국 ) (시 13) (시군 125)	◦기존 바이오가스화시설과 체육공원 간 환경·안전 문제를 지속적 관리가 필요함 ◦준공 후 시설별 이용실적 및 유지관리를 지속 점검하여 운영 효율성 확보 필요 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	적정
13	순천시	용두항 어촌신활력 증진사업 (2단계)	2023. ~ 2027.	- 순천시 별량면 구룡리 73번지 일원 - 사업대상지 208,070㎡, 어항 면적 15,652㎡ - 어촌스테이션·치유소공원(3,276㎡), 어항시설 개선(선착장, 호안, 공동작업장), 전동윈치, 마을정주여건개선(배수·스마트안전망·마을회관 리모델링)	90 (국 63) (시 8.1) (시군 18.9)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦해양수산부 승인 받은 기본계획 사항을 실시설계에 반영하고 변경시 행정절차 이행 등 철저 ◦착공전 관계기관 인·허가등 절차 이행 철저 ◦순천만 일원 기존 갯벌체험시설과 프로그램·기능이 중복되지 않도록 조정 필요 ◦H/W조성에 따른 효율적 운영을 위한 다양한 S/W 프로그램 발굴 필요 ◦사업 추진에 따른 지역민, 전문가 의견수렴 과정과 채널 마련 ◦공사로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 방지대책 수립	조건부
14	나주시	나주 마한 별자리공원 조성사업 (재심사)	2022. ~ 2028.	- 나주시 반남면 신촌리 산 5-3번지 일원 - 부지 6,419㎡, 건축 1,500㎡(단층) - 천체관측소, 전시실, 세미나실, 사무실, 주차장 등	75 (국 -) (시 36) (시군 39)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦운영재정 대책 보완 필요 ◦프로그램의 다양화 및 별자리 공원만의 독특한 전시공간 콘텐츠 개발 필요 ◦강사 및 보조자 양성 교육·투입 방안 검토 ◦운영 시 안전대책 강구 ◦공사시 민원 최소화 방안 마련	조건부
15	광양시	구봉산 관광단지 진입도로 개설 (2단계)	2023. ~ 2028.	- 광양시 황금동 1-9번지 ∼ 황길동 1288-1번지 일원 - 도로개설 L=745m, B=11m	149 (국 -) (시 29) (시군 120)	◦중기지방재정계획 반영 등 관련 절차 준수 ◦연차별 가용재원 내 시·도비 확보를 통해 추진 ◦자연생태 훼손 최소화 공법 적용 ◦사업 추진시 민원발생 최소화	조건부
16	광양시	제26회 광양매화축제	2027. 3월중 10일간 / (2027. ~ 2029.)	- 광양시 다압면 매화마을 일원 - 매화·매실 관련 전시, 공연, 체험, 판매 등	6 (국 -) (시 -) (시군 6)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립 ◦외부관광객 확보, 관광산업 연계, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 경제활성화로 이어질 수 있는 방안 마련	조건부
17	담양군	담양 국제명상센터 건립 (2단계)	2024. ~ 2027.	- 담양군 용면 월계리 산81-1번지 - 부지 4,999㎡, 건축면적 944.19㎡, 연면적 3,550.33㎡ - 명상센터 1동(지하1층/지상3층)	190 (국 57) (시 34) (시군 80) (민자 19)	◦인근 유사시설과 차별화되는 독창적인 프로그램 개발 강구 ◦지역 농특산물 판매장 연계, 지역 관광 자원과의 패키지 상품 개발 등 지역민과 상생방안 마련 ◦민간사업자가 계획대로 재원 조달될 수 있도록 지속적 관리 필요 ◦민간자본보조금 집행 투명성 관리 철저 ◦건립 후 운영주체의 자부담, 운영적자 발생 시 부담주체, 시설 유지관리 책임 등을 협약에 명확하게 규정할 필요가 있음	조건부
18	곡성군	곡성 심청어린이 대축제	2027. 10월중 4일간 / (2027. ~ 2029.)	- 곡성군 오곡면 기차마을로 232, 곡성섬진강기차마을 - 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠와 가족 참여 프로그램	5 (국 -) (시 -) (시군 5)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립 ◦외부관광객 확보, 관광산업 연계, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 경제활성화로 이어질 수 있는 방안 마련	조건부
19	곡성군	구산선문 태안사 국제명상센터 건립사업	2027. ~ 2029.	- 위치 : 곡성군 죽곡면 태안사 일원 - 부지 3,742㎡, 연면적 1,129.67㎡ - 사업량 : 지상 1층, 지하 1층 - 지상 1층(명상센터 1동, 수련관 2동) - 지하 1층(생활편의시설)	90 (국 27) (시 16) (시군 38) (민자 9)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦용지비, 예비비등 반영하여 사업비 산출내역 보완 필요 ◦경제적 타당성 근거 자료 불명확 ◦운영계획의 구체화 필요 ◦태안사 전체 시설 활용 방안 구체화 필요 ◦국시비등 재원조달 계획 미확정 ◦시설 이용객 산출근거 재검토 ◦시설 및 프로그램 운영계획 구체화 필요 ◦태안사의 자부담 능력과 추가사업비 부담계획을 확인할 필요가 있으며, 준공 후 운영비 및 운영적자 부담주체를 명확히 할 것	재검토
20	구례군	구례 산수유 꽃축제	2027. 3월중 9일간 / (2027. ~ 2029.)	- 구례군 산동면 산수유꽃군락지 일원 - 개막행사, 공연, 체험 프로그램 등	5.25 (국 -) (시 -) (시군 5.25)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 ◦다중 밀집 인파사고가 발생하지 않도록 안전 대책 철저 수립 ◦반곡마을 계곡 너럭바위 포토존의 인파 통제 대책 필요 ◦산지 지형의 극심한 교통 체증 및 보행 안전 매뉴얼 구축 필요 ◦교통·쉼터·화장실·관광동선 등의 관광객 편의 개선 투자를 강화하는 방안이 필요 ◦외부관광객 확보, 관광산업 연계, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 경제활성화로 이어질 수 있는 방안 마련	조건부
21	고흥군	고흥군 노지스마트 농업 육성지구 조성	2026. ~ 2029.	- 고흥군 금산면 일원 - 부지 300ha - 용수공급시설 등 기반조성 및 시설장비 스마트화 등	95 (국 49) (시 9) (시군 21) (민자 16)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦비용과 편익의 산출 근거 제시 및 명확화 필요 ◦양파 전체 생산·판매액을 사업 편익으로 반영하고 시설운영비 위주의 비용을 산정한 경제성 분석의 적정성을 재검토 ◦스마트농업 도입에 따른 순증 편익과 실제 소요비용을 기준으로 경제성 산정 필요 ◦용역비·시설비 등 세부 사업비의 객관적 산출근거와 양파 매출단가 및 자부담 재원확보 근거 보완 ◦노지 스마트농업에 대한 수요의 객관적·합리적인 근거 자료 제시 필요 - 사업 참여 희망수요조사 결과 제시 - 기존 시설과의 중복성 검토 결과 제시 ◦민간 자부담 16억원(16.8%)의 부담 주체별 분담내역과 농가 자부담 이행능력 검증	재검토
22	고흥군	비식용 해조류 자원화 시설	2026. ~ 2027.	- 고흥군 금산면 신평리 356-2 일원 - 부지 2,421㎡, 시설면적 650㎡ - 해조류 자원화 시설 건립 1개소	70 (국 35) (시 -) (시군 21) (민자 14)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦원료의 안정적 확보와 연중 가동 가능성을 검토하고, 운영·판로계획 구체화 ◦예산의 목적외 사용 방지 및 사업비 정산 철저 ◦사업의 효율적인 추진을 위하여 전문가 참여 채널 마련 ◦사후 유지·관리방안 구체화 필요 ◦민간사업자가 계획대로 재원 조달될 수 있도록 모니터링하고, 계획 불가능 시 대안 마련 ◦생산제품의 안정적인 판로 확보 등 지속가능한 운영방안 마련 필요 ◦공사시 민원 최소화 방안 마련	조건부
23	보성군	벌교해도 꼬막섬 해양관광테마공원 조성	2027. ~ 2029.	- 보성군 벌교읍 장도리 산1-63 일원 - 부지 25,000㎡, 연면적 450㎡ - 관광안내센터 건축연면적 450㎡/지상3층, 테마공원 및 진입도로 조성 13,586㎡, 갯벌탐방로 L=2.1㎞, B=3.0m, 숲길조성 L=1.2㎞, B=3.0m 등	96 (국 -) (시 48) (시군 48)	◦재원 확보 및 사업계획에 대한 통합시 사업부서와의 협의 필요 ◦실측 조사에 근거한 수요를 추정하고 사업규모 재산정 ◦실효성 있는 사업 내용으로 구체화 필요 - 기존 사업 내용과 시설물의 기능과 역할의 중복성 검토 결과 제시 - 기능·역할이 중복되어도 수요 많다면 기존 시설물들과의 차별화 전략 구체적 제시 ◦기존사업 연계 관광수요를 반영한 시설 규모 재검토 ◦수익 창출 극대화 전략 마련 - 비수기 이용객 확보 방안 마련 - 주변 관광산업·자원과 연계 방안, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 지역경제활성화 창출 방안 마련 제시 ◦시설별 운영방안, 유지보수 계획 마련 ◦환경생태계에 미치는 영향 최소화	재검토
24	화순군	화순군 농산물 수출플랫폼 구축사업 (2단계)	2023. ~ 2027.	- 화순군 능주면 남정리 120-4일원 - 부지 7,161㎡, 연면적 1,533.73㎡ - 신축 1동	103 (국 -) (시 50) (시군 53)	◦변경된 사업규모 및 총사업비를 중기지방재정계획에 반영 필요 ◦SW사업 추진시 연간, 월별 계획 등을 구체적으로 수립하고 내실있게 추진 필요 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저 ◦사업완료 후 보조금 정산 철저 ◦건설기술진흥법령에 의거 건설사업관리 등 체계적으로 추진 ◦건설사업관리계획수립시 산출된 적정 인원수의 감리원배치 ◦태양광시설 적극 반영 검토	조건부
25	장흥군	신청사 건립사업	2028. ~ 2030.	- 현 청사부지 - 부지: 10,563㎡ - 건축: 2,358.92㎡ - 연면적: 14,461.64㎡ - 지하1층 ~ 지상9층 (現 지하1층~지상4층)	621 (국 -) (시 -) (시군 621)	◦실시설계 과정에서 사업비 조정이 예상되므로 실시설계 후 2단계 심사 ◦지하1층~지상9층 규모의 공사비 변동요인 사전 관리 ◦장애자용, 전기차 주차장 확보 등 구체화 필요 ◦공공건축심의주택, 장애물 없는 생활환경(BF)인증 등 관련 행정절차 이행 후 추진 ◦장흥읍의 랜드마크적인 건축물이 건립될수 있도록 건축기획 단계에서부터 건축설계(공모), 건설사업관리 등 체계적으로 추진 ◦태양광시설 적극 반영 검토 ◦사업추진시 민원발생이 없도록 대비하고 시공 및 안전관리 철저	조건부 2단계
26	강진군	제2스포츠타운 조성을 위한 부지 매입	2026. ~ 2029.	- 강진군 도암면 학장리 83-5 인근 - 부지 107,940㎡ - 사업량 : 야구장 2개소 시설보수, 파크골프장 27홀 신규조성	82 (국 -) (시 -) (시군 82)	◦파크 골프장의 신설 계획의 논리적 타당성 제시하고 사업내용 재검토 ◦제2스포츠타운의 중장기 시설배치 및 활용계획을 구체화하고 매입 규모의 적정성을 재검토 ◦27홀 파크골프장 및 야구장의 실제 이용수요와 대회·전지훈련 유치 가능성을 객관적으로 검증하여 사업의 활용성과 지역경제 파급효과 구체화 필요 ◦이용수요·수입 추계, 관광객 유발효과에 대한 객관적 자료 제시 ◦야구장 단순 시설 보수가 아닌 차별화되고 현대적 시설로 개선 방안 검토	재검토
27	강진군	강진하맥축제	2027. 8월말 3일간 / (2027. ~ 2029.)	- 강진군 종합운동장길 60 인근 -개막포퍼먼스, 공연행사(가수, DJ, 댄스팀), 부대행사(비어센터, 음식부스, 캠핑존, 등)	21 (국 -) (시 -) (시군 21)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축적하고 개선방안 등 마련 ◦외부관광객 확보, 관광산업 연계, 지역특산물 판매 등 지역 소득창출 및 경제활성화로 이어질 수 있는 방안 마련	조건부
28	강진군	강진 월출산 월남사 전통차문화체험관 건립	2027. ~ 2028.	- 강진군 성전면 월남리 1141-1 - 월남사 차문화체험관 건립 1식 450㎡, 연면적 450㎡	60 (국 18) (시 11) (시군 25) (민자 6)	◦중기지방재정계획 미반영 ◦사전이행절차 미이행 ◦사업비 산출근거의 불명확 ◦파급 효과의 분석 방법 불확실성 ◦재원조달 계획 미확정 ◦정책적·공익적 필요성을 경제성 부족과 구분하여 판단하는 것이 필요 ◦민간사업 지연·중단에 대비한 협약상 안전장치 및 사업비 분담·환수방안 등 명확화 필요 ◦시설물 유지관리 및 운영방안 등 구체적 계획 필요 ◦체험프로그램 운영 방안 구체화 필요	재검토
29	강진군	마량농공단지 패키지 지원사업 (2단계)	2024. ~ 2028.	- 강진군 마량면 마량리 665-1번지 일원 - 부지 814㎡, 연면적 1,257.26㎡ - 청년문화센터 건립, 아름다운거리조성, 노후공장 리뉴얼	97 (국 62) (시 8) (시군 26)	◦사업비 집행 및 공정관리 철저로 재정 부담 최소화 ◦농공단지 환경을 고려한 건축물이 건립될 수 있도록 준비 ◦태양광시설 적극 반영 검토 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	적정
30	해남군	해남 군민의 날 행사	2027. 5.1 1일간 / (2027. ~ 2029.)	- 해남군 해남읍 해남로 72 일원 - 기념식, 축하공연, 체험행사 등	5 (국 -) (시 -) (시군 5)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦지역의 다문화가족, 아동, 청소년 참여 등 군민들이 직접 참여 가능한 프로그램 필요 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련	조건부
31	영암군	영암읍 대동공장 문화재생사업 (재심사)	2025. ~ 2027.	- 영암군 영암읍 교동리 226-1 일원 - 부지면적 11,245㎡, 건축연면적 : 1,600㎡ - 문화예술아뜰리에, 대동광장, 대동라운지, 어린이 체험공방 조성 등	178 (국 20) (시 -) (시군 93) (지방채 65)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦총사업비 200억원 이상으로 증가시에는 중앙투자심사 대상임 ◦운영 수지 적자 최소화 방안 마련 ◦체류형관광 활성화 및 독창적 콘텐츠 발굴 필요 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	조건부
32	영암군	제51회 영암군민의 날 행사	2026. 10.29~10.30. 2일간 / (2026. ~ 2028.)	- 영암군 종합운동장, 국민체육센터 일원 - 월출산바우체, 월출인 고향의 밤, 전야제, 기념식, 문화체육행사 등	3.5 (국 -) (시 -) (시군 3.5)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦지역의 다문화가족, 아동, 청소년 참여 등 군민들이 직접 참여 가능한 프로그램 필요 ◦사업비 집행의 효율성 및 투명성 확보 필요 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련	조건부
33	영암군	2026 천하장사 씨름대축제	2026. 11.30~12.6. 7일간	- 영암군 실내체육관 - 초, 중, 고, 대학부 씨름대회	12 (국 8.5) (시 -) (시군 3.5)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련 ◦실내 체육관 인파 밀집 및 동선 분리 대책	조건부
34	영암군	2027 영암왕인문화축제	2027. 4.3~ 4.11 9일간 / (2027. ~ 2029.)	- 영암군 왕인박사 유적지 - 개·폐막 행사, 불꽃놀이, 테마퍼레이드, 공연프로그램, 체험프로그램	17 (국 -) (시 -) (시군 17)	◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련 ◦체험형 프로그램 확대 및 교통 약자 배려 현장 편의 인프라 대책 수립 필요	조건부
35	영암군	기오감센터 조성사업	2026. ~ 2029.	- 영암군 영암읍 개신리 280-1 일원 - 부지 17,632㎡ - 건축 1,000㎡ - 센터 연면적 3,000㎡(지상1층 ~ 지상3층) - 외부공간 연면적 3,680㎡(정원, 주차장)	126 (국 -) (시 63) (시군 63)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦규칙적 참여율 명확한 근거 제시 필요 ◦구체적 수요 검토 후 시설 규모 산정 ◦기존 시설과의 중복성 검토 ◦기오감 상징 할 수 있는 건축 구상 및 센터 부지 종합 조성계획 수립 필요 ◦운영계획 및 사후 유지 관리 방안 구체화 필요	재검토
36	영암군	월출산 스테이션 F 조성사업 (재심사)	2021. ~ 2028.	- 영암군 영암읍 개신리 306-7일원 - 부지 28,102㎡ - 부대시설 150㎡(지하1층, 지상3층) - 사계절 썰매체험장, 알파인코스터	190 (국 -) (시 84) (시군 106)	◦총사업비 200억원 이상으로 증가시에는 중앙투자심사 대상임 ◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦부지 매입 및 행정 선행 절차 완비 철저 ◦시설 운영비와 유지관리 비용에 대한 구체적인 자립형 수지 개선 및 관리 대책을 마련 필요	조건부
37	무안군	일로농공단지 패키지 지원사업 (2단계)	2024. ~ 2028.	- 무안군 일로읍 상신기리 761번지 일원 - 부지 4,337㎡, 연면적 1,267.1㎡ - 노후 농공단지 내 청년근로자를 위한 복지시설 건립 및 근로여건 개선	60 (국 42) (시 5) (시군 13)	◦중기지방재정계획 변경 필요 ◦준공전 시설별 운영기준 구체화 ◦공정관리 및 지연 시 대책 마련 ◦농공단지 환경을 고려한 건축물이 건립 될 수 있도록 준비 철저 ◦태양광 시설 적극 검토 ◦부실시공 방지를 위해 관리ㆍ감독 철저	조건부
38	함평군	함평 모악산 꽃무릇축제 개최	2027. 9월중 4~5일간 / (2027. ~ 2029.)	- 함평군 해보면 용천사 꽃무릇공원 일원 - 축하공연, 체험 이벤트, 투어버스, 홍보 등	3 (국 -) (시 -) (시군 3)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦경제 효과를 올릴 수 있는 대책 마련 ◦주민·상인 참여 확대 방안 마련 ◦휴게 및 위생 인프라 개선 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련	조건부
39	함평군	함평 나비대축제 개최	2027. 4월말~5월초 / (2027. ~ 2029.)	- 함평엑스포 공원 및 함평읍 시가지 일원 -나비·곤충·자연생태 전시 및 체험 프로그램 운영 - 문화예술 공연 및 축하행사	16.8 (국 -) (시 -) (시군 16.8)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련 ◦국·시비 및 민간재원 확보 방안 검토	조건부
40	함평군	대한민국 국향대전 개최	2027. 10월 중순~ 11월초 (약17일) / (2027. ~ 2029.)	- 함평엑스포 공원 및 함평읍 시가지 일원 - 국화를 활용한 전시·경관 콘텐츠, 문화예술·체험프로그램, 전시관 및 상설콘텐츠 운영	12 (국 -) (시 -) (시군 12)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦지역축제장 안전관리 매뉴얼(행정안전부 2024.9.) 참고하여 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 할 것 ◦행사 평가 결과 보고를 통해 행사 자료를 축척하고 개선방안 등 마련 ◦수입증대 방안 모색 ◦청년층 참여 유도를 위한 ‘로컬 굿즈’ 팝스토어 및 푸드 페어링 프로그램 검토	조건부
41	함평군	주포항 생활권 어촌신활력 증진사업	2024. ~ 2027.	- 함평군 함평읍 석성리 일원 - 부지 7,675㎡, 연면적 1,705.12㎡ - 문화돌봄스테이션 조성, 먹거리스테이션 조성, 어항시설정비, 어민회관 리모델링	100 (국 70) (시 9) (시군 21)	◦해양수산부 승인 받은 기본계획 사항을 실시설계에 반영하고 변경시 행정절차 이행 등 철저 ◦문화돌봄스테이션 이용대상을 연령대로 파악하여 그에 맞는 프로그램 구상 필요 ◦운영·관리의 주체와 방법, 부족재원 확보방안 등 검토 및 수립	조건부
42	영광군	미래모빌리티 전장부품 기능안전 확보를 위한 전자파잔향실 시험기반 구축	2026. ~ 2029.	- 영광군 대마면 송죽리 1030-11 - 전자파잔향실 시험평가(부품,실차) 및 인증 장비 4종 구축 등 - 전자파잔향실 시험평가 및 인증센터 건축 1동	150 (국 67.5) (시 20.25) (시군 47.25) (민자 15)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦산업단지 내 기구축된 전자파 적합성 인증센터의 가동률·시험실적 자료를 근거로 추가 구축 필요성 입증 필요 ◦사업 추진 체계에서 각 참여 주체별로 기능과 역할, 주요 담당 내용 등 구체적으로 제시 - 특히 영광군과 한국산업기술진흥원의 본 사업에서의 역할과 사업 내용 제시 - 기존에 투자한 사업 내용과의 중복성 검토 결과 제시 ◦사업비 산출 근거 제시 ◦사업수지 산정시 객관적 수치 및 근거 ◦기대효과 정량적 제시 ◦민간자본 투입 확약서 제시 ◦수익발생 시 활용방안 구체화 ◦사후 관리 및 사업 종료 후 자립 할 수 있는 구체적 계획 수립 필요	재검토
43	신안군	청년바다마을 조성사업	2025. ~ 2027.	- 신안군 임자면 대기리 2523-11번지 일원 - 부지 9,552㎡, 연면적 1,670.58㎡ - 주거시설 25호, 커뮤니티센터 1동, 어구창고 1동 등	100 (국 50) (시 15) (시군 35)	◦운영 관리, 유지ㆍ보수, 입주자 선정, 입주ㆍ퇴거자 관리 등에 차질이 없도록 운영 계획 보완 ◦시설을 활용한 프로그램 구체화 ◦입주율 미달 시 시설 활용 대안 필요 ◦랜드마크와 명소 될 수 있도록 마스터 플랜 수립 권고 ◦태양광 시설 검토 ◦부실시공 방지를 위한 공사 관리·감독 철저	조건부
44	신안군	수산물 산지거점유통센터(FPC) 건립	2026. ~ 2028.	- 신안군 압해읍 학교리 산2 외 11필지 - 부지 18,784㎡, 연면적 1,653㎡ - 김밥김 가공공장 및 보관시설 1식	80 (국 24) (시 12) (시군 12) (민자 32)	◦중기지방재정계획 반영 필요 ◦개발행위허가 등 관련 행정절차 준수 ◦지역 주민 인력 우선 고용 ◦환경 생태계에 미치는 영향 최소화 ◦민간사업자가 계획대로 재원 조달될 수 있도록 모니터링하고, 계획 불가능 시 대안 마련 ◦물류보관 창고 현황 데이터 분석 제시 ◦용수확보 방안 제시 ◦전남권 수산물거점유통센터와 물류창고 공동 사용 가능 여부 검토 필요 ◦기존 시설 투자와 중복성 검토 필요 ◦부지규모 적정성(확대 방안 등) 검토 필요	조건부 2단계
45	신안군	전남권 수산물 거점유통센터 (FPC) 건립	2026. ~ 2028.	- 신안군 압해읍 송공리 789-2번지 외 5필지 - 부지 4,595㎡, 연면적 5,260㎡ - 마른김 가공공장 및 보관시설 등 1식	150 (국 45) (시 22.5) (시군 22.5) (민자 60)	◦실시설계 과정에서 총사업비 200억원 이상으로 증가시에는 중앙투자심사 대상임 ◦개발행위허가 등 관련 행정절차 준수 ◦지역 주민 인력 우선 고용 ◦환경 생태계에 미치는 영향 최소화 ◦민간사업자가 계획대로 재원 조달될 수 있도록 모니터링하고, 계획 불가능 시 대안 마련 ◦물류보관 창고 현황 데이터 분석 제시 ◦용수확보 방안 제시 ◦수산물 산지거점유통센터와 물류창고 공동 사용 가능 여부 검토 필요 ◦기존 시설 투자와 중복성 검토 필요 ◦부지규모 적정성(확대 방안 등) 검토 필요	조건부 2단계

※ 투자심사 대상 중 국․도비 보조사업 등은 보조율에 따라 도, 시·군비가 변경될 수 있음.